환성사 대웅전 석탑 원형 보수

특기시방 및 설계설명서

1. 사 업 명 : 환성사 대웅전 석탑 원형 보수

2. 지 정 별 : 보물 제562호(경산 환성사 대웅전 (慶山 環城寺 大雄殿))

3. 소 재 지 : 경북 경산시 하양읍 환성로 392-30, 환성사 (사기리)

4. 사업예산 및 설계공사금액

4.1 사업예산

◉ 총  사  업  비 :  \110,000,000원

• 2018년 사업비 :   \60,000,000원   (국비 42,000천원, 도비 5,400천원, 시비 12,600천원)

• 2019년 사업비 :   \50,000,000원   (국비 35,000천원, 도비 7,500천원, 시비 7,500천원)

4.2 공사예정금액

• 총  공사금액 :  \110,000,000원

• 도급공사금액 :   \99,000,000원

• 설계  용역비 :   \11,000,000원

5. 연    혁 :  환성사는 팔공산에서 갓바위 약사여래부처님이 계신 관봉(冠峰)을 거쳐 동남쪽으로 이어진 해발 811.3m의 환성산(環城山)과 해발 574m의 무학산이 연꽃처럼 감싸고 있는 곳에 자리한 천년고찰로 주변의 산이 절을 성처럼 둘러싸고 있는데 그 형세가 마치 고리(環)와 같아 환성사(環城寺)라 이름지었다 한다. 환성사는 신라 헌덕왕의 아들로 15세에 출가하여 신라 흥덕왕 7년(832년) 팔공산 동화사를 창건한 심지왕사(心地王師)가 흥덕왕 10년(835)에 창건하였다고 전한다. 심지왕사는 진표 율사(眞表律師)와 제자 영심(永深)대사의 법통을 이었으며 동화사를 창건한 스님으로 알려져 있고 삼국유사 권제4 ‘심지계조(心地繼祖)’조에도 등장하는 인물이지만 그 밖의 자세한 행장은 알려져 있지 않다.

그 후 환성사는 고려 말에 화재로 인해 일부 소실된 것을 조선 인조 13년(1635)에 신감대사(神監大師)가 중창하고 영조 4년(1728)에 중건했다. 순조 24년(1824)에는 심검당을 중건하고 광무 원년(1897)에 긍월대사(亘月大師)가 사찰을 중창했다고 한다. 1973년 대웅전을 해체 보수했고, 1976년에 외부를 단청했다. 또 1990년 환성사 뒷산인 무학산을 넘어와야만 했던 사찰진입로를 하양읍 대곡리 입구 계곡으로 도로를 새롭게 닦아 왕래가 휠씬 쉬워지도록 했다. 이후 1982년에는 명부전을, 1995년에는 요사인 감로당을 중건해 오늘에 이르고 있다.

6. 주변현황 :   환성사로 가려면 먼저 경산 하양읍의 하양파출소 앞 삼거리에서 파출소 맞은 편 도로를 따라 200m 가량 가면 금락교라는 작은 다리가 나오는데 이 다리를 건너자마자 좌회전해 100여미터 정도 가량 가다보면 왼쪽으로는 대구가톨릭대학교로 가는 오르막 도로가 나오고 직진하면 작은 마을로 들어가는 비포장도로가 나온다. 여기에서 직진해 계속 가다보면 오른쪽에 환성사 표지판이 나오는데 표지판을 보고 산 쪽으로 쭉 오르다 보면 환성사로 곧장 들어가는 석조다리가 나온다. 석조다리를 지나면 바로 환성사를 만날 수 있다.

환성사는 신라 흥덕왕 10년 (835년)에 심지왕사가 창건한 사찰로 보물 562호인 대웅전과 지방유형문화재 제84호인 심검당이 있으며, 최근에 도문화재자료로 지정된 수월관이 대웅전 전면에 위치하고 있다.

7. 사업대상 현황

7.1 대웅전앞 삼층석탑 현황

석탑의 원형이 일부에 남아있고 나머지 부재는 변형된 부재로 되어있으며, 지대석이 일부 침하되거나 이완되어 있어 기초보수가 필요한 실정이다. 석탑의 전반에 걸쳐 지의류가 분포하고 석탑부재의 상당부분이 훼손되어있다. 석재 부재간의 조립 시 시멘트 몰탈로 줄눈이 시공되어있어 제거가 필요하고 일부 유실된 부분은 수지처리가 필요하다.

8. 사업지침

o ‘18년 : 관계전문가 자문을 받아 고증자료 등을 바탕으로 대웅전 앞 석탑을 원형대로 복구한다.

o ‘19년 : ’18년 사업에 이어 고증 및 자문 결과를 바탕으로 대웅전 앞 석탑을 원형을 찾아 복원한다.

9. 보수공사개요

9.1 공사범위

- 석탑 전체를 해체하여 원형대로 보수 : 1기

9.2 기존 석탑 부재 보존처리 : 1식

- 몰탈제거, 건식세척, 습식세척, 수지충전, 석재성형, 석재접합 등

9.3 기존 석탑부재 교체 등 보수 : 총10개

- 하대면석, 하대갑석 교체 : 2개

- 1층 탑신석 이상 전체 신재보충 : 8개

■ 문화재 수리공사시 준수사항

가. 문화재수리업체 영업소재지 준수사항

- 근무상황기록부, 근로계약서, 근로소득원천징수영수증, 급여지급내역 등을 보관하여야 한다.

나. 진행중인 공사현장 준수사항

- 현장대리인 및 공종 분야별 수리기술자는 현장에 상주하여야 하며, 신고 승인된 본인과 일치하여 한다.

- 현장을 무단이탈(연속 5일 이상)하거나 자격대여 등의 위반사항이 없도록 현장을 관리하야 한다.

다. 문화재 수리현장의 참여 수리기술자 관리 시 유의사항

- 문화재수리 공사 착수 전에 신고 된 현장대리인과 수리종류별 참여기술자를 현장에 배치하여야 한다.

- 중복배치, 자격대여, 이중취업 등의 위법 사항이 없어야 하며, 위법사항이 확인된 경우에는 고발 및  행정처분을 받게 된다.

- 공사 참여 기술자 등에 대한 관리대장을 작성하여 관리하고 상급기관 자료요구, 확인점검, 감사 시 자료로 활용하게 한다.

라. 현장사무실에 설계도서 등의 비치

- 계약서(시공, 감리) 사본, 착공계(현장대리인 신고 내역 포함) 사본

- 설계도서

- 작업일지(시공자), 감리일지(감리자)

- 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서

- 기술(능)자 사본

- 현장배치표(현장대리인, 감리원 등)

- 하도급계약 관련 서류

- 비상연락 체계도, 안전관리계획서

- 공종별, 공정별 사진(착공전, 작업중, 준공후)

- 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서

- 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등

마. 문화재수리실명제 시행(해당사항이 있는 경우 적용)

- 적용대상 : 문화재보수정비 국고보조사업 중 국가검토사업

바. 긴급연락체계 관련

- 공사안내판에는 수리실명제를 위한 정보와 수리현장 재난 시 공사관계자(시행청, 수급자)에게 긴급 연락이 취해 질 수 있도록 관련 내용을 명기토록 함

■ 보수공사 특기사항

- 석탑을 해체한 후 최대한 구부재를 재사용하여 보수한다.

- 석탑 보수 후 사용되지 않는 잔존 유구는 환성사 남서편 공터에 보관하도록 한다.(배치도 참조)

- 보충되는 석재 가공의 마무리는 기존 석재와 같도록 하여 이질감이 없도록 한다.

- 석탑 해체부재 보관 및 작업장은 요사채(종무소, 배치도 참조) 남측 공터에 설치하도록 하며, 해체부재 하부에는 받침목을 설치한다.

- 해체공사 전 추가 파손의 우려가 있는 부분은 긴급 보존처리를 하도록 한다.

- 석재 신재보충 시 원형이 잘 남아있는 석재에 맞는 석재를 반입하여 보수한다.

- 사리함을 봉안할 경우 1층 탑신석에 사리공을 시공하도록 한다.

- 현재 석탑부재 간 몰탈 제거 상태에서 현장 기술지도 자문을 통하여 보수 방안을 마련한 후 공사를 진행하도록 한다.

- 석탑 기초 및 석탑위치 이동 여부 확인을 위해 지반 트렌치 조사를 실시한다. (석탑 위치 확인을 위한 고증 사진은 추가로 확보하지 못함)

- 기단부의 석재에 대한 산지와 석질 분석을 통하여 신재보충 및 석탑 부재 제작 시 활용하도록 한다.

- 석탑 부재 중 신재보충 되는 석재의 보이지 않는 부분에 공사년도를 표기하도록 함.

- 석탑 해체 및 보수공사 전반에 걸친 내용을 기록으로 남기고 수리보고서를 충실히 작성하여 제출한다.

- 공사시행 시 석탑 해체 및 조립의 각 시공 단계별로 관계전문가 자문을 받아 공사를 시행토록 함.

10. 공종별 세부설계내용

10.0 일반사항

• 공사시공자는 공사 전에 반드시 설계도서를 확인 검토하여 시공상 불합리한 부분이나, 현장과 상이한 부분이 있을 경우에는 감독관에게 보고 후 변경 등의 조치를 취한다.

• 보수공사 시 공정별로 공사를 완료한 후 담당원의 승인을 득한 후 다음 공사를 시작하여야 한다.

10.1 가설공사

• 공사 전 공사내용과 공사 중임을 표시하는 안내판(900×1,200mm-설계도면참조)과 출입금지판을 공사장 입구에 설치한다.

• 공사안내판에는 공사 실명제에 따른 기술자 및 기능자, 감독관의 성명, 연락처를 기입해야 한다.(도면 참조)

• 강관 비계 및 부속재는 KSF 8002 기준에 합격한 재료를 사용하며 비계용 발판은 구멍철판(P.S.P)을 사용한다.

• 비계의 하부는 침하되지 않도록 널재 등으로 보강조치 하도록 한다.

• 공사 중 불필요한 것은 즉시 장외로 반출하여 항상 청결 및 정돈을 해야 한다.

• 공사용 반입자재들은 공터에 적치하였다가 필요시 운반하여 사용하며 자재가 흩어지거나 섞이지 않도록 조치하여야 한다.

특히, 자연조건에 의하여 비바람에 날리거나 피해를 입을 우려가 있을 때에는 천막 등으로 안전하게 보호해야 한다.

• 화재예방을 위하여 적당한 곳에 소화기 또는 방화수를 비치하여야 한다.

• 공사용 전기는 가설전기를 이용하여야 하며, 전기 인입 관련사항은 사전에 감독관협의 후 승인한 사항에 한한다.

• 공사시행으로 인하여 발생되는 폐기물은 일정한 장소에 모아두었다가 즉시 반출하도록 하는데 반출시 먼지나 분진발생으로 인한 불편이 없도록 한다. 현장을 항상 청결하게하고 정리정돈을 잘해야 하며 공사 시공상 자연변경, 손상부분은 원상복구 하여야 하며 공사완료 때에는 건물내외의 정리 정돈 및 청소를 철저히 하여야 한다.

☞ 공통가설 공사물량

품 명	규 격	수 량	단 위	품 명	규 격	수 량	단 위
공사안내판	제작,설치	1	개소

☞ 가설공사 공사물량 (기존부재 보존처리)

품 명	규 격	수 량	단 위	품 명	규 격	수 량	단 위
석재거치대		1.00	식

☞ 가설공사 공사물량 (기존부재 교체)

품 명	규 격	수 량	단 위	품 명	규 격	수 량	단 위
외부강관비계	3개월,2회	124.80	m2	한식진폴조립해체		1.00	대
가설계단	3개월,2회	5.40	m2	석탑주변트랜치	문화재구역내, 경질토사, 0~1m	4.0	m3
비계발판	3개월,2회	38.40	m2	관계전문가입회비	기단트랜치	1.00	식

10.2 삼층석탑 보수

■ 일반사항

- 본 시방은 환성사 대웅전 앞 삼층석탑의 안정적이고 장기적인 보존을 위해 현재 석재의 표면파손, 오염, 풍화작용, 지의류 및 미생물에 의한 피해, 석재의 균열 등 석탑의 안정적 보존을 저해하는 모든 요소를 효과적으로 제거하여 문화재를 장기적으로 보존, 관리함을 목적으로 한다.

- 문화재 보존처리공사는 문화재보호법 제 17조의 규정에 의하여 보존과학업 등록을 필하고 ‘UNESCO(국제연합 교육, 과학, 문화기구)' 및 ’국제박물관회의' 등에서 권고하는 보존처리 규범에 따라 문화재 보존처리에 많은 경험이 있는 숙련된 ‘보존과학기술자’와 ‘보존과학기능자’ 등의 전문가가 시행하도록 한다.

■ 석탑 해체 공사

가. 석탑 해체 계획

(1) 석탑 해체 전 현황에 대한 사진촬영 및 훼손지도를 작성한다.

(2) 석탑 해체 시 필요한 장비 및 도구 등을 미리 준비한다.

- 한식진폴, 화물용 밴딩바, 고무판, 부직포, 로프, 한지, 수평계, 노루발 장도리, 결속선, 지렛대, 각재, 청테이프(번호표 등 작성), 빗자루 및 솔, 압축공기 스프레이 등

(3) 석탑 해체에 따른 해체 부재 보관 장소 및 운반 이동경로를 미리 파악한다. 운반에 따른 전선 등 지장물이 있는지 미리 확인하고 대비한다.

(4) 석탑이 해체 되면 기존 위치 및 기준 레벨을 확인할 수 있도록 현황 측량을 하여 두고, 대웅전 기단 등에 기준레벨을 표시하여 둔다.

(5) 석탑 해체 전 사면에 지반 트렌치를 통하여 기초 상태 및 석탑의 위치 이동 여부를 확인하도록 한다.

(6) 석탑 해체 보수 시에는 유구 보호 및 탐방객의 안전을 위하여 가설울타리를 설치하고 공사장 입구에 공사안내판 등을 설치한다.

(7) 가설 비계는 2단으로 설치하도록 하며 석탑부재와 적당히 이격하여 부재 면에 직접 닿지 않도록 한다.

(8) 해체․조립 시에는 한식 진폴을 사용하도록 하며, 시공여건이나 안정성 등을 고려하여 담당원의 승인을 받아 크레인을 사용할 수 있다.

(9) 해체는 상부, 전면, 후면 등의 순으로 하고, 해체 부재는 관리가 용이하도록 해체한 순서대로 부재 보관 장소에 적재한다.

(10) 석탑 부재 해체 시에는 고무판 등으로 모서리를 보호하고 부직포를 감싸고 로프를 묶어 고정한 후 해체한다.

(11) 상대면석 및 하대면석은 여러 부재로 조성된 석탑부재이므로 화물용 밴딩바를 사용하여 미리 고정한 후 상부 부재를 해체하도록 하여 석탑의 붕괴를 예방한다.

(12) 석탑 해체 공사 전 파손의 우려가 있는 석탑 부재의 균열 및 박리부분에 대해서는 미리 긴급 보존처리 후 해체하도록 한다.

(13) 석탑 해체 시 모든 내용을 사진과 기록으로 남기도록 하며, 공사 완료 후 수리보고서를 작성하여 발주처 및 관공서에 제출하도록 한다.

나. 석탑 해체 시 유의사항

(1) 해체 전 부재의 위치가 바뀌지 않도록 각 부재별로 번호표를 부착하며, 번호표에는 부재명, 부재 위치, 방향 등을 기록한다.

(2) 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 석탑 부재는 사전에 안전조치를 취한 후 해체한다.

(3) 해체 시 모서리부분이 파손되지 않도록 세심한 주의를 기울여 해체하되, 부재 모서리 부위의 보호를 위하여 고무판을 보강하고 외부에 부직포로 감싼 후 로프로 묶어 안전하게 해체하도록 한다.

(4) 해체 시 석탑부재 결구 기법, 적심석의 축조 방법, 적심석 재료, 상하 부재의 조립 방법 등을 확인하고 기록으로 남긴다.

(5) 매몰된 부재는 해체 전 사진촬영을 하고 부재를 청소한 후 실측하여 두고, 부재명, 부재의 위치, 방향 등을 표기한다.

(6) 석탑 해체 및 기초부 공사 중 유물이 발견될 시에는 즉시 공사를 중지하고 감독관에게 보고하여야 한다.

(7) 석탑의 해체 후에는 현장 자문회의를 실시하여 재사용 부재 및 보존처리 범위 등의 공사범위를 결정한다.

다. 석탑 해체 부재 보관 장소에 대한 계획

(1) 석탑 해체부재 보관 및 작업장은 요사채(종무소) 남측 공터에 설치하도록 한다.(배치도 참조)

(2) 석탑 보수 완료 후 재사용하지 않는 잔존 유구는 공양간 남측 공터에 보관하도록 한다.(배치도 참조)

(3) 해체된 석탑 부재는 보관 장소에 해체한 순서대로 배치하며, 적재 시 하부에 각목을 깔고 부재 간 충분한 거리를 두어 작업이 용이하게  보관한다.

(4) 해체 부재는 재사용재와 불용재로 구분하여 보관하되, 천막으로 보양하여 우수에 피해가 없도록 보관한다.

(5) 석탑 해체부재 보관 및 작업장 주위에는 가설울타리를 설치하여 석탑 부재를 보호하고 탐방객의 출입을 제한하도록 한다.

■ 석탑 보존처리공사

가. 보존처리 원칙

(1) 문화재가 가지고 있는 역사적 사실은 물론 처리 전 상태, 처리방법, 사용재료에 대해 자세히 기록으로 남긴다.

(2) 문화재를 손상 또는 훼손시키거나 새롭게 만들거나 위조는 물론, 조그만 파편이라도 제거해 버리면 안 된다.

(3) 될 수 있는 한 보존처리는 단순하고 필요 이상으로 손을 대서는 안 된다.

(4) 아름다움이나 역사적 관점에서 원래의 상태를 유지해야 한다.

나. 보존처리시 주의사항

(1) 필요에 따라 언제나 보존처리 전 상태로 되돌이킬 수 있는 재료와 방법을 선택한다.

(2) 필요시 다시 보존처리 할 경우 어려움이 없도록 해야 한다.

(3) 문화재가 간직한 모든 증거물(역사적 사실, 아름다움, 기술적인 사항)은 보존처리 후에도 남아있어야 한다.

(4) 현재 잔존되어 있는 물질은 최대한 보존토록 한다.

(5) 손상되고 훼손되어 있는 부분을 복원할 때에는 원래의 문화재 외관과 조화되어야 하며 돋보이지 않는 재료를 사용하되 처리된 부분은 구별될 수 있어야 한다.

(6) 보존처리는 숙련된 보존과학기술자 및 보존과학기능자에 의해 처리되어야 하며 초보자는 숙련자의 자문 없이 보존처리를 행해서는 안 된다.

(7) 보존처리 한 경험이 없는 보존처리는 처리 전에 그 문화재나 관련된 전문가와 협의 하에 보존처리 원칙을 지키면서 해결책을 구해야 한다.

다. 사용재료 및 기준

(1) 표면의 이물질은 전문가(대학 또는 연구소)의 자문을 받아 이를 제거하고, 가장 적합한 약품을 사용하되 사용 전 국립문화재연구소 보존과학연구실 등에서 권장하는 문화재에 대한 안전한 것을 검토 후 사용하여야 한다.

(2) 클리닝 작업 시 나무칼과 브러쉬에 의한 제거작업을 병행하되 보조적인 기능만을 수행하도록  한다.

라. 보존처리지침

(1) 환성사 대웅전 석탑 원형 보수공사 전 반드시 예비조사를 통하여 처리 전 현황 파악 및 시공 준비를 실시한다.

(2) 지의류 제거 보수 등 그에 따른 보존처리 방법을 기술지도회의의 자문을 받아 결정토록 하되 화학약품 사용은 최대한 지양하여야 한다.

(3) 탑 표면의 지의류 및 미생물을 제거한다. 세척작업은 해체 복원한 후 실시하도록 한다.

(4) 기존 설치된 몰탈을 제거한다.

(5) 파손 및 탈락에 의해 석재가 유실된 부분에는 수지충전, 석재성형, 석재접합, 철물보강을 통해 원형을 복구하도록 한다.

(6) 보존처리 방법 및 사용한 약품 등 전반적인 사항에 대해 사진을 첨가하여 보고서를 작성하도록 한다.

마. 보존처리공정

1) 예비 조사 및 손상 지도 작성

(1) 석탑에 대한 자세한 관찰과 정확한 손상부위 및 오염상태 등을 기록한다.

(2) 사진촬영을 실시하여 작업의 순서와 공사 범위를 결정하고, 구체적인 시공방법을 선택하여야 한다. 미세한 부분에 대하여는 정밀촬영을 하여 기록표에 첨부한다.

(3) 사전에 주위 환경에 대해 방해요인이 없는지 확인하고 이를 방지하여 보존처리 공사 시 악영향을 끼치는 경우에 대비하여야 한다.

2) 건식세척

(1) 표면세척을 하기 전, 한곳을 지정하여 샘플링 세척작업을 통해 세척의 강도와 횟수를 제한한다.

(2) 건식세척은 붓으로 먼지를 제거한 후, 여러 종류의 대나무 헤라와 소도구, 경우에 따라 메스 등을 이용하여 이끼 및 지의류, 이물질 등 오염물질을 대상에 무리가 가지 않는 범위 내에서 제거 한다. 그 후 부드러운 솔을 이용하여 잔류 먼지 및 이물질 등을 제거한다.

※ 대상 문화재보다 강도가 약한 소도구를 사용해야만 한다.

3) 습식세척

(1) 물 뿌리기(Water sprinkling), 물 분무(Water spray, 5~10kg/cm2) , 스팀(steam, 0.5 kg/cm2), 습식 블라스팅(Wet grit blasting, 물+마모입자, 0.5~3 kg/cm2),건식 블라스팅(Dry grit blasting), 미세블라스팅(Microblasting), 화학세척(Chemical cleaning), 흡수분말 및 특수점토(Absorbent powder and Special clay), 레이져 세척(Laser cleaning) 등의 방법이 있으나 가능하면 물을 이용한 습식 클리닝법을 기본으로 사용하고 필요한 경우 스팀클리닝과 중성세제를 이용한 화학세척을 실시하되, 국립문화재연구소 및 관계 전문가에게 자문을 받도록 한다.

(2) 물은 쉽게 선택적 투과성 막을 통한 이동으로 이물질의 구성 세포 간 원형질막을 통과함으로써 구성세포의 분자구조를 와해시키고 분해하기 시작한다. 또한 전돌 표면과 원형질막을 통과한 물 분자사이에는 수소결합이 쉽게 형성되어 석재표면과의 사이에는 상당히 강하고 탄력 있는 막이 형성되기 때문에 쉽게 제거할 수 있다.

(3) 본격적인 세척작업 전 한곳을 지정하여 샘플링 세척작업을 실시한다. 이를 통해 세척의 강도와 횟수를 제한하여 전체적은 표면세척작업을 실시한다.

※ 세척에는 화학약품을 가능한 한 사용을 억제하도록 하고 부득이하게 화학약품을 사용해야 할 경우 관계 전문가의 자문을 통해 약품을 선정하고 약품 사용 후에는 물을 사용하여 중화처리 하도록 한다.

4) 몰탈제거

(1) 세척 및 건조가 완료된 이후 석탑표면에 고착된 시멘트 몰탈 제거작업은 보존처리용 소도구 등을 사용하여 석조물의 표면에 손상을 주지 않도록 최대한 안전하게 제거한다.

5) 수지접합 및 복원작업 (수지충전, 석재성형, 석재접합, 철물보강)

(1) 석재 표면의 수분을 완전 제거한 후 실시하며, 결실부는 에폭시계의 수지를 석분으로 혼합하여 충진⋅성형하며, 석조물 접합부는 티타늄봉을 삽입하여 에폭시수지로 접합한다.  또한 추후 표면박락이 우려되는 크랙부에는 에폭시수지를 충진한다.

6) 고색 및 보채작업

(1) 접합작업이 완료된 이후 Acrylic계열의 안료를 사용하여 접합부 및 복원부에 기존의 석탑표면과 어울리도록 색맞춤 작업을 한다.

☞ 석탑 보존처리 공사물량

품 명	규 격	수 량	단 위	품 명	규 격	수 량	단 위
건식세척	30%	2.54	m2	석재성형		8	0.01m3
습식세척	50%, 2회	5.96	m2	석재접합		0.16	m2
몰탈제거		16	0.1m2	철물보강	5*100mm, 티타늄봉	12.00	개소
수지충전		11.45	m

■ 기존부재 교체공사

1) 석탑의 재질 및 제작

(1) 석탑의 재질은 기존 석탑과 같은 색상과 석질의 것을 반입하여 시공한다.

(2) 석탑 부재의 표면 마감은 노출되는 부분은 잔다듬으로, 접촉되는 부분은 도드락다듬, 기타 내부에 매설되는 부분은 혹두기 마감으로 가공한다.

2) 석탑의 조립

(1) 석탑하부 지반상태를 확인한 후 현장 자문회의 결과에 따라 기초의 형식 및 규모를 결정하도록 한다.

(2) 조립 전에 부재의 균열부분에 대한 접착, 지의류의 제거 등 수리 및 보존처리를 한 후 조립을 시행한다.

(3) 석조물의 조립 및 이동시 부재간의 접촉, 충격에 의한 부재손상과 기 조립된 부재의 이동을 방지하기 위해 고무판, 목재, 부직포 등으로 보양한다. 하대면석 및 상대면석은 화물용 밴딩바를 사용하여 미리 고정한 후 상부 석탑부재를 조립한다.

(4) 조립은 한 번에 전체적으로 하지 말고 매 단마다 충분히 안정된 상태를 검토한 후에 다음 단을 조립한다.

(5) 상부 부재가 하부 부재와 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠로 조정하면서 조립한다.

(6) 상부 부재 설치 시 부재의 이동, 조정으로 인해 하부 부재가 이완되지 않도록 하부 부재를 철선, 각목 등으로 고정한 후 조립한다.

[기단부의 조립]

(7) 접착부는 따내거나 보강하지 않고 기존 위치에 맞춰 조립한다.

(8) 기단 하부에는 대반석을 지면 밑에 놓고 그 위로 지대석을 설치한다.

(9) 지대석 위에 탱주와 면석을 설치한다.

(10) 면석은 탱주의 기존 위치에 정확하게 물린다.

(11) 상대 및 하대의 기단 내부에는 속채움을 밀실하게 하여 상부하중이 갑석이나 면석에 집중되지 않도록 한다.

[탑신부의 조립]

(12) 탑신부는 상ㆍ하부의 갑석과 최대한 밀착되게 설치하며, 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠로 받쳐서 조정한다.

[옥개석의 조립]

(13) 옥개석은 탑신 위에 탱주와 면석을 잘 맞추어 벌어지지 않도록 한다.

(14) 옥개석 밑에 넣는 속채움도 갑석 밑에 넣은 속채움 방법으로 한다.

[상륜부의 조립]

(15) 노반, 복발의 순으로 조립한다.

(16) 이전 수리 시에 상륜부 각 부재의 순서가 잘못된 것은 바로 수정하여 세운다.

☞ 석탑 부재교체 공사물량

품 명	규 격	수 량	단 위	품 명	규 격	수 량	단 위
석탑해체		3.33	m3	하대갑석 교체	B3-북	1.00	개소
채움석해체		0.82	m3	1층탑신석 보충	신재보충	1.00	개소
터파기	문화재구역 내, 기계장비	30.75	m3	1층옥개석 보충	신재보충	1.00	개소
잔토처리	8톤덤프, 반출5km	26.97	m3	2층탑신석 보충	신재보충	1.00	개소
되메우고 다지기	토사,굴삭기0.2m3+콤펙트1.5톤	3.78	m3	2층옥개석 보충	신재보충	1.00	개소
잡석다짐	기계,t=250mm	5.06	m3	3층탑신석 보충	신재보충	1.00	개소
토석판축지정	기계장비	20.00	m3	3층옥개석 보충	신재보충	1.00	개소
채움석쌓기		0.82	m3	노반 보충	신재보충	1.00	개소
채움석		0.45	m3	복발 보충	신재보충	1.00	개소
석탑조립		3.59	m3	편수산정	한식석공	2.92	인
하대면석 교체	B2-북	1.00	개소	편수산정	드잡이공편수	2.03	인

10.3 문화재 수리보고서 작성 및 제출

※ 본 공사를 완료한 후 별첨 작성기준에 따라 문화재수리보고서를 작성하여 발주처에 제출한다. 수리보고서 규격 및 수량은 아래사항을 참고하되, 담당원의 지시에 다른다.

- 규격 : A4, 50페이지 내외

- 수량 : 20부, 책제본

- CD작성 : 2부, 수리보고서 내용수록

11. 기타

1) 공사시공 : 본 공사는 설계도서에 의하여 도급공사로 시행한다.

2) 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 60일간으로 한다.

3) 설계변경조건 :	가) 골재 및 자재의 운반거리에 변동이 생겼을 경우

나) 구조물의 위치 및 신축부지의 위치 변동이 생겼을 경우

다) 설계수량, 보수범위 등의 변경이 있을 경우

라) 설계도서상과 현장이 현저한 차이가 있을 경우

마) 해체 결과 설계도서와 차이가 있을 경우

바) 기타 담당원이 인정하는 변경이 있을 경우

5) 골재 및 자재 운반거리 및 장소

자재 및 골재명칭	채취 및 구입장소	운반거리	비고
자갈, 잡석, 자연석	건재상	20㎞
모래, 진흙, 백토	건재상	20㎞

6) 기타사항

본 시방서에 기입되지 않은 사항은 문화재수리표준시방서 및 국토교통부 제정 건설공사 표준시방서에 의한다.

공 사 예 정 공 정 표
공사명 : 환성사 대웅전 석탑 원형 보수공사										공사기간 : 착공 후 60일간
공 종	수 량			공 사 기 간(월)												기 타
				20 40 60
1. 가설공사		1	식
2. 석탑해체 및 보존 처리공사		1	식
3. 신재보충부재 제작 및 석탑조립		1	식
4. 운반공사		1	식
5. 현장청소 및 정리

문화재 수리보고서(작성지침)

■ 원고작성 (A4 용지에 워드프로세서로 작성)

문화재명 : 한문으로 기재

1. 지 정 별 : 한문으로 기재하고, (  )안에 지정 연월일 기재

2. 소 재 지 : 한문으로 기재

3. 예    산 : 00,000천원     국  비 : 00,000천원

지방비 : 00,000천원

자부담 : 00,000천원

4. 연    혁

◦ 창건, 중건에 관한 사항은 간단히 기록하고, 근래의 보수실적(년도, 보수범위, 보수내용)에 관하여 상세히 기록

◦ 관련 사실을 인용한 경우 발췌한 근거(문헌, 문서 등)를 괄호안에 명기

◦ 서원, 향교, 사당의 경우 관련된 인물, 위패 등 부속 관련 유물에 대하여도 간단히 기록

5. 주변(건물배치)현황

◦ 수리 대상문화재 보존에 유무형으로 영향을 줄 수 있는 환경, 지형, 배수관계, 경역내의 건물 배치현황, 관련

경역 면적 등을 기록

◦ 경역 정비 사업일 경우 경내 지하수 유출, 배수 현황 등을 기록

◦ 지형의 등고, 토질, 수목 생태계 등도 사업과 관련될 경우 기록

※ 해당문화재를 진입 답사하는 거리, 이정표 등의 내용은 기록하지 않아도 된다.

6. 보수대상현황

◦ 보수 대상물의 구조, 양식, 보존상태, 퇴락부위 상태 및 원인, 훼손부위 등을 정확하게 기록하되, 특히 당해

문화재를 수리하여야 할 원인이 되는 퇴락 현상 범위를 구체적으로 작성

◦ 주요 구조재(기둥, 보, 도리 등)와 조각물(포작, 용머리, 초가지, 화반 등)장식재, 벽화, 옛단청, 회화, 석조각물,

문양류 등의 현황을 기록

7. 사업개요

가. 사업지침

◦ 서술어를 “～한다.” 의 미래형 시제사용

(예 : 사랑채의 기단을 정비한다.)

나. 공사내용

◦ 현황조사시 발견된 수리해야 할 원인에 대한 조치내용, 교체 부재의 수량 등을 구체적으로 기술하며,

기둥․도리․보 등의 중요구조재의 보수가 포함될 경우에는 당해 부재의 위치, 보수 내용을 구체적으로

기록(필요시는 보수저 및 관정사진, 삽도 첨부)

◦ 자재 등의 단위는 C, G, S를 원칙으로 사용하되 목재의 “才”와 부재별 본수를 기록

◦ 서술어를 “～하였다.”, “～하였음”등 과거형 시제 사용

(예 : 기단을 10cm 두께로 강회다짐하였다.)

◦ 설계변경(준공감액)을 하였을 경우에는 사유 등을 간략하게 기록

다. 공사추진현황

◦ 접수일 :                                              ◦ 승인일 :

◦ 설계자 :                                              ◦ 설계검토자 :

◦ 설계금액 :                                            ◦ 공사계약일 :

◦ 도급액 :                                              ◦ 공사기간 :

◦ 도급자 :                                              ◦ 공사감독자 :

◦ 현장대리인 :                                          ◦ 기술지도자 :

◦ 수리기능자 :                                          ◦ 준공검사자 :

◦ 준공검사일 :                                          ◦ 시행청 :

◦ 준공금액 :

※ 접수일은 시행청에서 문화재청에 신청한 날짜 또는 보수를 접수한 날짜, 승인일은 보수과에서 승인한 날짜를 기록한다.

※ 공사기간은 착공계와 준공계 날짜를 기록한다.

※ 관계자의 공무원인 경우는 소속․직급․성명을 기록하고 설계자와 도급자는 회사명과 대표자 성명을 수리기술 ․ 기능자는 등록자와 현장에서 작업	한 자의 자격분야․등록번호․성명을 기록한다.

8. 기   타

◦ 공사일지 수록

◦ 기존 상량문 및 신축 상량문 기록 (확인 가능할 경우)

◦ 현장 자문위원회의 회의 내용 등을수록

◦ 기타 기록이 필요한 사항

※ 참고사항

◦ 수리보고서 원고 끝줄에는 수리보고서를 작성한 자의 소속, 직급과 성명을 기록한다.

◦ 한문 기재는 인명, 고유명사에 한한다.(한자가 아니면 뜻을 이해하기 힘들 때)

◦ 소수점 이하의 숫자도 같은 크기로 기재하며(예 : 22.4평), 무시해도 좋을 만한 소수점 이하의 숫자는

삭제한다.  (예 : 성토 250.67M2 → 성토 251M2)

◦ 명실이월 되어서 동일 문화재가 2건의 보고서가 적성되어야 할 경우 공사내용을 연도별로 분리하여

한 건으로 작성한다.

◦ 수리보고서에는 B4로 축소된 서명한 도면을 첨부하고 도면 상태가 좋지않은 경우는 별도 잉킹작업을 한다.

■ 사  진

◦ 공사 전․과정․후 대비사진 및 중요공정부분은 최대한 잘 나온 것으로 수록

◦ 사진첩을 만들어 공사과정 설명서를 기재

◦ 연결 사진은 이음새가 표지되지 않게 부착

◦ 공사중 노출이 안되는 공정은 특별히 전체 및 세부사진을 첨부함.

<예  시>

- 지붕공사의 산자엮기, 강회다짐, 적심채우기, 마사반입 등

- 벽체공사의 외엮기(눌외, 설외에 새끼엮기)맞벽치기, 재사벽바르기 등

- 목부재의 맞춤, 이음 등

- 성곽공사의 기초 깊이와 다짐, 뒷채움의 폭, 심석설치와 밀실다짐 등

- 건축물, 석조물, 고분의 기초와 속채움 및 다짐

- 기타 석축, 배수로, 담장 등 안보이는 부분

사업추진 시 준수사항

■ 다음 사항에 대하여는 공사 전반에 걸쳐 반영․준수하여야 함

가. 설계도서 등의 비치

『현장 사무실 등 공사현장에는 다음의 서류가 항상 비치․관리되어야 함』

ㅇ 계약서(시공, 감리) 사본, 착공계(현장대리인 신고 내역 포함) 사본

ㅇ 설계도서

ㅇ 작업일지(시공자), 감리일지(감리자)

ㅇ 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서

ㅇ 기술(능)자 사본

ㅇ 현장배치표(현장대리인, 감리원 등)

ㅇ 하도급계약 관련 서류

ㅇ 비상연락 체계도, 안전관리계획서

ㅇ 공종별, 공정별 사진(착공전, 작업중, 준공후)

ㅇ 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서

ㅇ 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등

나. 문화재수리실명제

『문화재수리 관계자의 실명 등 일부 정보를 ‘문화재청 홈페이지’에 대국민 공개하여 문화재 수리품질 향상 등을 도모하는 제도』

ㅇ 적용대상 : 문화재보수정비 국고보조사업 중 국가검토사업

ㅇ 운영원칙 : 상시공개

ㅇ 공개 내용

방 법	공 개 할 내 용	비고
공사안내판 (수리현장)	▪ 공사 개요(공사명, 공사내용, 공사기간) ▪ 공사 참여기관(발주자, 시공자, 감리자) ▪ 공사 관계자(공사 감독관, 감리원, 현장대리인), 참여 기술자·기능자)의 성명, 소속, 연락처, 기술자 자격명, 자격번호 ▪ 현장대리인의 부재기간, 부재사유 ▪ 사진, 조감도(문화재사진, 사업조감도, 사업계획도 등)	필수
문화재청 홈페이지	▪ 공사기본 항목(발주자, 시공자, 감리자, 감독관, 감리원, 현장대리인, 참여기술자·기능자에 관한 정보) ▪ 기술지도 자문위원 ▪ 도면, 수리보고서	필수
	▪ 일반기능자에 관한 정보	선택

ㅇ 문화재청 홈페이지 자료 입력 방법

- 시·군·구 전자행정시스템 입력 자료가 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr)의 수리실명제 공개 코너와 연동되므로 관련 자료는 전자행정시스템을 통해 입력

* 완료신고 시의 최종도면(배치도 1장, 평면도 1장, 입면도 4장, 단면도 4장 등 총 8장)은 PDF, JPG 등으로 변환하여 별도 입력

- (입력시 주의사항) 설계도면, 내역서, 시방서 업로드 시 zip, alz 등 압축파일 형태 지양 (압축파일은 문화재청 홈페이지와 연동 불가)

ㅇ 공사 참여자의 정보 공개를 위해 「개인정보보호법 」제16조(개인정보의 수집제한) 및 제17조(개인정보의 제공)에 따라  공사 참여 관계자로부터 반드시 ‘개인정보 제공 동의서’ 및 ‘제3자 정보제공 동의서’ 징구(*별첨1 참조)

다. 안전관리 대책수립 및 점검관련

ㅇ 문화재 수리현장별로 안전대책을 수립하고 수시로 점검하여 필요한 조치를 취하도록 함

ㅇ 수리현장에는 안전관리자를 선임하여 산업재해 예방 등 안전관리업무를 총괄하도록 함

ㅇ 붕괴 우려가 있는 석축, 배수로 등에 대하여 수시로 점검하여 필요한 조치를 시행토록 함

ㅇ 전기시설은 누전차단기가 부착된 분전함을 설치하고, 전선 등을 점검, 감전 위험 요소를 제거토록 함

ㅇ 가설비계의 안전성을 상시 점검하고, 가설비계에 추락 및 낙하물 방지 시설 설치 여부와 안전성을 점검하여 조치토록 함

ㅇ 경사지에서의 공사 차량, 작업 기기의 전복, 전도 방지를 위한 안전교육을 실시하고, 현장 안전조치를 취하도록 함(공사차량 전복에 따른 인명사고 수시발생)

ㅇ 문화재수리 현장에 설치하는 가설덧집 및 울타리는 문화재 경관에 어울리는 재료 및 색채를 사용토록 하고, 수리현장을 조망할 수 있는 구간은 전면투명가림 또는 일부 투명가림막을 설치토록 함

라. 긴급연락체계 관련

ㅇ 공사안내판에는 수리실명제를 위한 정보와 수리현장 재난 시 공사관계자(시행청, 수급자)에게 긴급 연락이 취해 질 수 있도록 관련 내용을 명기토록 함

ㅇ 시행청 및 수급자는 상시 연락체계 유지토록 함